『재료 허용값 확보 시험
공동연구 제안요구서』

-추진항목-

( KAI 개발주관 )

2021. 07. 27.

한국항공우주산업(주)

목 차

1. 개발요구사항	1

2. 개발방안	2

3. 개발일정	3

4. 과제관리 점검회의	4

5. 납품물	4

1. 개발요구사항

1.1 개요

□ 본 문서는 한국형기동헬기 (Korean Utility Helicopter, 이하 ‘KUH’라 칭함)의 동력전달장치 성능 개량 사업에 적용되는 재료 허용값 확보 시험을 기술한 것이다. 본 문서는 KUH의 동력전달장치 성능 개량 사업에 대한 재료 허용값 확보 시험수행을 위해 한국항공우주산업㈜(이하 ‘갑’) 구매부서의 제안요구서(RFP: Request For Proposal, 이하 ‘RFP’라 칭함) 발행을 위하여 작성된 것이며, 소요부서의 기본적인 시험 요구사항을 기술한 문서이다. 또한, 본 문서는 시험 용역업무를 수행하는 참여 기관(이하 ‘을’)이 ‘갑’의 구매부서에서 발행한 ‘RFI’ 및 ‘RFP’를 근거로 ‘제안서(Proposal)’ 및‘ 견적서(Quotation)’를 작성, 제출하는 데에 기준을 주기 위하여 작성되었으며, 본 문서 기술된 시험 계획 및 일정을 만족하도록, ‘을’은 상세 시험 계획 및 일정을 수립하여 제출하고, 제출된 제안서를 기본으로 계약 체결 후, ‘갑’과의 세부 기술 협의를 통하여 최종 확정될 것이다.

1.2 요구연구내용

□ 기어/축/하우징 적용 재료 허용값 확보 시험수행(3종)

No.	재질	규격
1	Pyrowear 53	AMS6308
2	AISI 9310	AMS6265
3	RZ5 (ZE41)	AMS4439

표 1. 시험 소재

2. 개발방안

□ 일반적으로 항공기용 소재개발은 장기간의 일정과 높은 비용이 투입되는 분야로서 목표한 장비개발보다 선행하여 수행되어야 함. 특히 신뢰성을 최우선으로 고려하며
높은 기술적 난이도를 요구하는 항공기 부품용 신규 소재 개발은, 제품 적용을 위해 약 10년 정도 소요됨에 따라 제품개발 전 별도의 장기과제로 추진되어야 함에 따라 본 과제에서는 회전익기용 기어 및 하우징 등에 대해 신뢰성이 기입증된 소재를 활용하여 개발을 추진함.

□ 본 과제를 통해 기어 및 하우징 소재와 규격을 확보하여 재료 허용값을 확보함. 재료 허용값은 국내 공동연구개발기관 및 관련 실험실을 보유한 학계를 공동연구개발기관으로 참여시켜 시편 시험을 통해 재료 허용값을 획득하고 관련 소재에 대해 데이터베이스를 구축함. 아래의 재료 허용값 확보 시험 세부 항목은 추가/변동 가능함.

No.	시험 항목		관련 규격	시편 수량
1	인장시험	상온	ASTM E8M	310
		고온	ASTM E8	30
2	압축시험	상온	ASTM E9	20
3	전단시험	상온	ASTM B831	20
4	베어링 시험 (Pin Type Bearing)	상온	ASTM E238	40
5	파괴인성 (KIC)	상온	ASTM E399	30
		저온	-	30
6	피로시험	HCF	ASTM E466	18
		FCP	ASTM E647	6

표 2. 재료 허용값 확보 시험 항목

2.1 개발역할분담

□ 동력전달장치 성능 개량 사업과 관련하여 재료 허용값 확보 시험은 참여 기관에서 수행하고 KAI는 이에 필요한 기본자료 등을 제공함

개발업무	수행주체	수행지원	비고
원소재 제공(AISI 9310, Pyrowear53)	KAI	-	-
시편 가공 (AISI 9310, Pyrowear53)	참여기관	-	-
시험 시편 제공 – RZ5 – 마그네슘 하우징	KAI	-	-
시험계획서 및 절차서 작성	참여기관	KAI	KAI 검토
측정장치 검/교정 수행	참여기관	-	KAI 검토
시험준비검토회의(Test Readiness Review)	참여기관	KAI	KAI 승인
시험 개시	참여기관	-	KAI 검토
시험 실패 보고서 작성/제출(고장 발생시)	참여기관	KAI	KAI 승인
시험 결과 분석 / 검토 회의	참여기관	KAI	KAI 확인
시험결과보고서 작성	참여기관	KAI	KAI 승인
공정개발간 기술자문	참여기관	-	-

3. 개발일정

□ 과제 개발 일정 및 주요 업무(‘21. 6. 1 ~ 24. 12. 31)

○ 재료허용값 확보 시험 참여 기관 선정

○ 시험 요구도 분석(치구 설계/계획서 작성) 및 준비

○ 재료허용값 시험 계획서 작성

○ 시험 착수 검토회의(TRR) 수행

○ 시험 착수

○ 항목별 시험 수행, 결과 분석

○ 연차별 결과 보고서 작성

○ 시험 결과보고서 작성 등

4. 과제관리 점검회의

□ 과제 진행을 위한 점검회의는 다음과 같이 수행한다.

구 분	내 용	장 소
착수회의	연구 방법 검토 및 협의	KAI
분기회의	과제 진행 현황 점검	협의
연간회의	연차별 연구결과 점검	KAI
종결회의	연구과제 최종 평가	KAI

5. 납품물

□ KAI는 개발된 결과물 사용권과 변경권한을 가져야 한다.

□ 참여기관은 재료 허용값 확보 시험을 통한 연구보고서 및 관련 결과물을 KAI에 제공하여야 한다.

□ KAI가 요청하는 경우, 재료 허용값 확보 시험 변경을 수행하거나 지원하여야 한다. 이 경우, 추가적인 비용은 별도 협의한다.

번호	납품물	납품수량	납품시기	비고
1	재료 허용값 확보 시험 일정표	전산파일	계약 후 2주 이내	KAI 확인
2	시편 제작 도면 및 성적서, 합치성 자료(AISI9310, Pyrowear 53)	전산파일 하드카피 1부	시험 개시 2주전	KAI 승인
3	시험 계획서 및 절차서	전산파일 하드카피 1부	시험 개시 2주 전	KAI 확인
4	시험 및 계측 장비 검교정 성적서 및 품질보증서	전산파일 하드카피 1부	시험 개시1주 전	KAI 확인
5	시험 준비 검토회의(TRR) 자료	전산파일 하드카피 1부	검토회의 수행 1주 전	KAI 승인
6	시험 실패 보고서	전산파일 하드카피 1부	현황 발생 즉시 보고 후, 3일 이내 보고서 제출	KAI 승인
7	시험 결과 보고서(재료별)	전산파일 하드카피 3부 (3개 재질)	시험 종료 후 2주 이내	KAI 승인
8	시험 진척 현황 보고서	전산파일 하드카피 1부	계약 후 매월	KAI 확인